과학기술정보통신부 공고 제2026-0293호

AI컴퓨팅자원 활용기반 강화사업 (GPU 확보·구축·운용지원) 공고문

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 국내 AI컴퓨팅 인프라의 신속 확충과 활용 기반 강화를 위해, 대규모·첨단 GPU를 확보·구축·운용할 수 있는 역량 있는 사업자를 공모·선정하는「2026년 AI컴퓨팅자원 활용기반 강화사업 (GPU 확보·구축·운용지원)」을 다음과 같이 공고하오니 많은 관심과 참여를 바랍니다.

2026. 3. 12.

과학기술정보통신부장관

정보통신산업진흥원장

1	추진 배경 및 목적

□ AI 개발·고도화·서비스 제공 등을 지원하는 AI컴퓨팅 인프라는 AI 생태계 혁신 성장에 필수 기반으로 중요성이 날로 증대

- AI 3대 강국 도약을 향한 ‘AI 고속도로’ 구축을 위해 신속한 AI컴퓨팅 인프라 확보 및 생태계 보급이 필요

→ 대규모·첨단 GPU 확보·구축·운용이 가능한 사업자를 공모·선정하여 GPU 구매·구축 등을 추진하여 시급한 AI컴퓨팅 인프라 확충 추진

□ 민관 협력으로 첨단 GPU를 신속하게 확보하여 ①국내 AI컴퓨팅 인프라 즉각 확충, ②생태계 활력 제고, ③글로벌 AI 경쟁 기반 확대 추진

2	사업 개요

<※ 세부내용 “공모안내서” 확인>

□ 협약 기간 및 사업예산

○ (협약 및 사업기간) ‘26. 협약월 ~ ’31. 12.31.(약 68개월, (’26년) 구축 및 서비스 개시, (’27~’31년) 서비스 운영)

○ (사업예산) 총 2,080,515백만원

* 본 사업 예산은 GPU 서버 및 부대장비(Rack, 냉각장치, 스토리지, 네트워크 케이블, 스위치, SW라이선스, 기술지원 패키지 등) 구매비용으로만 구성, ‘26년 내 순차적으로 모두 교부 추진 예정

□ 신청자격

○ 국내에서 GPUaaS 제공 및 운영이 가능한 사업자

* 최근 3년 이내 해당 사업자로서의 매출 및 운영 실적을 사업계획서에 포함

* 단독 및 컨소시엄 가능(컨소시엄의 경우 모든 사업자가 신청 요건 만족 필요)

□ 주요 사업내용

○ (데이터센터 상면 확보) 제안사는 최신 GPU 기종 중심으로 대규모 클러스터링이 가능하도록 국내에 데이터센터 상면공간을 준비

○ (GPU 구매·구축) 국가적 미래를 위한 AI컴퓨팅 인프라를 확충하는 사업으로, 최신 기종 중심 대량의 자원을 준비된 상면에 속도감 있게 구축 추진

- ①경제성(비용대비 높은성능) + ②대규모(대형 클러스터 우선) + ③직접 클러스터링(기술력 확보) + ④최신(최신 GPU 우선) + ⑤연내서비스를 중점 방향으로 추진

* 필요 시, 전담기관의 현장 관리‧감독이 가능해야 하며 사업수행기관은 이에 적극 협조하여야 함

○ (GPU 활용) 제안사는 구축하고자 하는 전체 GPU 자원 중 자체 활용 허용 자원의 비중을 제안*하고, 해당 자원의 활용 계획을 구체적으로 제시

* 운영비 등 고려 / 비중에 대해서는 제안사가 자유롭게 산정하여 제안(평가에 반영)

○ (GPU 서비스 운영) 독자 AI 파운데이션 모델 등 국가적 AI 프로젝트, 국내 산학연 등 대상으로 AI컴퓨팅 자원 제공 지원

○ (보안성 및 안정성 확보) 제안사는 구축될 전체 GPU 자원의 보안성 및 안정성 확보를 위한 인증(ISMS, CSAP 등) 보유 현황 및 향후 준수‧ 확보계획을 제시

3	평가 및 선정

□ 평가 항목 및 배점

○ 사업 준비도 및 경쟁력(50점), AI생태계 발전노력(26점), 사업이해도 및 추진역량(12점), 운영역량 및 사업관리(12점)를 평가

□ 사업자 선정 절차

○ 사업계획서의 적합성(사전) 검토 및 선정평가(평가위원회), 현장실사를 통해 후보 선정 후, 사업 심의·조정(사업심의·조정위원회)을 통해 최종 확정

* ’기금사업 협약체결 및 사업비 관리 등에 관한 지침‘ 제10조의 2항에 따라 제안사는 평가 의견이 있는 경우 협약체결 시 이를 반영하여야 하며, 반영 불가 시 차순위 협상 대상자와 협상 개시 가능

→ 평가 의견 및 타 제안사의 제안 내용 등을 종합적으로 고려, 우선순위 사업자 순으로 사업 및 예산편성 내용(GPU 구매 기종, 수량, 자체 활용 허용 자원 비중 등 포함)을 상호 협의하에 조정하고, 성실한 협상에도 불구하고 최종 협의가 불가능하다고 판단되는 경우 전담기관은 차순위 협상 대상자와 협상을 개시할 수 있음

4	추진절차 및 일정

준비 단계		사업계획 수립	‘26년 1~2월	▪ AI컴퓨팅자원 구축·운영 지원사업 계획수립
		↓
		과제 모집 공고	‘26년 3월~4월	▪ 사업자 모집 공고 및 사업설명회
		↓
지원 과제 선정 및 통보		과제신청서 접수	‘26년 3월~4월	▪ 전산접수(NIPA 사업관리시스템(NXT 시스템))
		↓
		사업수행기관 선정평가	‘26년 4~5월	▪ 평가위원회 ▪ 데이터센터 현장실사 포함
		↓
		사업수행기관 확정‧통보	‘26년 5월	▪ 사업 심의‧조정 통한 지원과제 및 예산 확정 ▪ 주관기관에 선정 결과 통보
		↓
협약체결 및 과제 수행		협약체결 및 지원금 교부	‘26년 5월~12월	▪ 협약 체결 ▪ 정부출연금 지급(분할 지급) * 협약 체결 현황에 따라 지원금 교부일정 변경 가능
		↓
		과제 수행	∼‘26년 12월	▪ 수행계획에 따른 과제 수행 - GPU 발주, 구축 및 연내서비스 개시
		↓
		중간보고	‘26년 9월	▪ 과제 추진현황 중간보고
		↓
		현장점검	‘26년 5월∼12월	▪ 과제 추진현황 및 사업비 집행 점검 - 데이터센터 현장점검 포함
		↓
		결과보고 및 평가	‘27년 1월	▪ 구축 결과보고서 등 제출 및 평가(과제평가위원회)
		↓
정산		사업비 정산	‘27년 2월	▪ 사업비 사용실적 보고 및 정산

※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

5	신청 및 문의 등

□ 사업계획(신청)서 전산접수 안내

○ 전산 접수 마감시한 : 2026. 4. 13.(월) 15:00 까지

○ 사업계획(신청)서 작성

- 정보통신산업진흥원 홈페이지(www.nipa.kr) → 알림마당 → 사업공고 → ‘AI컴퓨팅 자원 활용기반 강화사업’공고 → ‘사업계획서 작성안내 및 제출서류(양식)’ 다운로드 후 작성

○ 전산접수 및 서류제출

- 정보통신산업진흥원(www.nipa.kr) 홈페이지 하단(NIPA관련 웹사이트) → 사업관리시스템(NXT시스템, https://nxt.nipa.kr) → 총괄책임자 회원가입 및 로그인 → 전산접수(서류첨부) → 제출 완료

※ 서류접수는 온라인(전산접수)으로만 가능하며, 우편접수 또는 방문접수는 불가

□ 사업설명회 안내

ㅇ일정/장소 : 2026년 3월 20일(금) 오후 2시 / 포스코타워 역삼* 4층 이벤트홀

* 서울특별시 강남구 테헤란로134 (지하철 2호선 역삼역 3번 출구)

ㅇ문의처 : (사업설명회 담당) 박예찬 책임 (043-931-5796 / aiinfra@nipa.kr)

※ 주차비 지원은 불가하며, 당일 현장이 혼잡하오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

□ 문의처

구분	담당자 (이메일)	TEL
사업 관련	AI컴퓨팅자원 활용기반 강화사업 담당 (aiinfra@nipa.kr)	043-931-5796 043-931-5741
시스템 관련	NXT시스템 유지보수팀 (nxt_support@nipa.kr)	070-5151-8215 070-5151-8239

※ 전화문의 가능시간 : 평일 09:00∼18:00 (점심시간 12:00∼13:00 제외)

※ “시스템관련 문의처”는 전산접수시스템(NXT시스템) 사용과 관련된 문의만 가능하며, 사업관련 문의는 반드시 “사업관련 문의처”로 문의 바랍니다.